COMUNE DI
	SANTO STEFANO DI SESSANIO
		Provincia di L’Aquila

____________________________________________________________________

D E T E R M I N A Z I O N E
COPIA
AREA TECNICA

		DETERMINAZIONE
	
		 N°   49   DEL 02-08-2024

Oggetto: PNRR - FONDO COMPLEMENTARE PER LE AREE DEL TERREMOTO 2009 e 2016 - Sub-misura A4, "Infrastrutture e mobilità", Linea di intervento 5, intitolata Investimenti sulla rete stradale comunale - Intervento relativo a lavori di "RIQUALIFICAZIONE VIABILITÀ COMUNALE". CUP: E77H21012200001 - CIG 9500998793. APPROVAZIONE VARIANTE N. 1
      
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Premesso:

-	che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 in data 29/12/2023, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2024/2026 nonché la relativa nota di aggiornamento;
-	che con successiva Deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 in data 29/12/2023, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2024/2026 redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al d.Lgs. n. 118/2011;

Premesso, altresì:
-	che con il Decreto Legge 6 maggio 2021, n. 59 convertito con modificazioni dalla Legge 1° luglio 2021, n. 101, è stato istituito il Fondo complementare al PNRR con una dotazione complessiva di 30,6 miliardi di € per gli anni dal 2021 al 2026, ripartito tra i Ministeri competenti;
-	che ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera b), numero 1, del Decreto Legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1° luglio 2021, n. 101, una quota del Fondo complementare pari a 1.780 milioni di € per gli anni dal 2021 al 2026 è riferita al seguente programma: “1. Interventi per le Aree del terremoto del 2009 e 2016: 220 milioni di € per l'anno 2021, 720 milioni di € per l'anno 2022, 320 milioni di € per l'anno 2023, 280 milioni di € per l'anno 2024, 160 milioni di € per l'anno 2025 e 80 milioni di € per l'anno 2026”;
-	che al fine di garantire l’attuazione coordinata e unitaria degli interventi del Fondo Complementare per le Aree del terremoto 2009 e 2016, con l’art. 14 bis del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, è stata istituita una Cabina di Coordinamento Integrata, composta dal Commissario Straordinario per il sisma 2016 e, quanto al sisma del 2009, anche dal Coordinatore della Struttura di Missione Struttura per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, nonché dal Sindaco dell’Aquila e dai Coordinatori dei sindaci del cratere 2009;
-	che il Commissario straordinario per il sisma 2016, con nota del 9.8.2021 ha convocato la riunione di insediamento della Cabina di Coordinamento Integrata per il Fondo complementare PNRR Aree sisma 2009 e 2016, per il giorno 12 agosto 2021, per la definizione delle procedure operative finalizzate alla definizione del percorso di predisposizione dei programmi di intervento, da presentare entro il 30 settembre 2021, trasmettendo un dossier contenente gli atti e provvedimenti principali;
-	che la gestione di queste risorse è in capo alla Cabina di Coordinamento Integrata tra le governance dei due sismi 2009 e 2016 e le Regioni;
-	che a seguito delle decisioni assunte dalla Cabina di coordinamento integrata del 24 novembre 2021, è stata trasmessa la documentazione per la formulazione, da parte dei Comuni, delle proposte progettuali da candidare a finanziamento a valere sulle seguenti sub-misure del Programma di Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016:
-	sub-misura A.3, obiettivo 1, relativa a “progetti di rigenerazione urbana degli spazi aperti pubblici di borghi, parti di paesi e di città”
-	sub-misura A.4, obiettivo 5, relativa a “investimenti sulla rete stradale comunale”;

-	che a seguito delle decisioni assunte dalla Cabina di coordinamento integrata del 15 dicembre u.s., sono state formulate le proposte progettuali da candidare a finanziamento a valere sulle seguenti sub-misure del Programma di Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016:
-	sub-misura A.2.1 relativa a “progetti di rifunzionalizzazione, efficientamento energetico e mitigazione delle vulnerabilità sismiche di edifici e infrastrutture”:
-	sub-misura A.3.3.C, relativa a “Interventi per l’ammodernamento e la messa in sicurezza degli impianti sportivi ricreativi e di risalita”;

-	che con Deliberazioni di Consiglio Comunale n. 32 del 24/12/2021 e n. 36 del 30/12/2021, esecutive ai sensi di legge, sono state apportate al bilancio di previsione finanziario 2021/2023 le variazioni di competenza e di cassa, ai sensi dell’art. 175, commi 1-3, d.Lgs. n. 267/2000 analiticamente indicate nell’allegato a) alla Deliberazione stessa;
-	che con Deliberazione di Giunta Municipale n. 66 del 24/12/2021 è stato adottato, in forza dell’articolo 21 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, lo schema di aggiornamento del programma dei lavori pubblici per il triennio 2021-2023, predisposto dall’ufficio tecnico secondo il contenuto del DM 24/10/2014, allegato alla Deliberazione stessa che contempla l’esecuzione dei seguenti interventi, in precedenza non inseriti nel programma stesso,  finanziati con fondi PNRR - Fondo complementare per le aree del terremoto 2009 e 2016:
Descrizione dell’intervento	Importo complessivo intervento	
PNRR - Riqualificazione e rivitalizzazione sociale di uno spazio pubblico con rifunzionalizzazione di edificio “camping” connesso all’intervento	
€ 457.528,18	
PNRR – Riqualificazione viabilità comunale	€ 188.822,13	
PNRR – Riqualificazione e rivitalizzazione sociale di uno spazio pubblico con rifunzionalizzazione di edificio “camping” connesso all’intervento	
€ 261.227,41	
PNRR – Ammodernamento, messa in sicurezza del campo polivalente – tennis e di n. 2 rifugi siti nell’altopiano di campo imperatore	
€ 275.900,59	

Preso atto:
-	dell’allegato alla Ordinanza n. 6 del 30 dicembre 2021 del Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 - Sub-misura A4, “Infrastrutture e mobilità”, Linea di intervento 5, intitolata “Investimenti sulla rete stradale comunale” dal quale si evince che il Santo Stefano di Sessanio ha accesso alle seguenti  risorse finanziarie per gli interventi di seguito riportati:

-	€ 188.822,13 per l’intervento di “Riqualificazione viabilità comunale” - Soggetto attuatore: Struttura di missione Sisma 2009 - CUP: E77H21012200001;

-	dell’allegato alla Ordinanza n. 7 del 30 dicembre 2021 del Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 - Sub-misura A3, “Rigenerazione urbana e territoriale”, Linea di intervento 1, intitolata “Progetti di rigenerazione urbana degli spazi aperti pubblici di borghi, parti di paesi e di città” dal quale si evince che il Comune di Santo Stefano di Sessanio ha accesso alle seguenti  risorse finanziarie per gli interventi di seguito riportati:

-	€ 457.528,18 per l’intervento di “riqualificazione e rivitalizzazione sociale di uno spazio pubblico con rifunzionalizzazione di edificio “camping” connesso all’intervento” - Soggetto attuatore: Commissario Sisma 2016/Struttura di missione Sisma 2009 – CUP: E77H21012140001;

-	dell’allegato alla Ordinanza n. 8 del 30 dicembre 2021 del Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 - Sub-misura A2 “Comunità energetiche, recupero e rifunzionalizzazione edifici pubblici e produzione di energia / calore da fonti rinnovabili”, Linea di intervento n. 1 intitolata “Rifunzionalizzazione, efficientamento energetico e mitigazione vulnerabilità sismiche di edifici pubblici”, dal quale si evince che il Comune di Santo Stefano di Sessanio ha accesso alle seguenti  risorse finanziarie per gli interventi di seguito riportati:

-	€ 261.227,41 per l’intervento di “rifunzionalizzazione e riqualificazione immobili comunali denominati “Via IV Novembre” e “ex lavatoio” - Soggetto attuatore: Commissario Sisma 2016/Struttura di missione Sisma 2009 -– CUP E77H21012850001;

-	dell’allegato alla Ordinanza n. 9 del 30 dicembre 2021 del Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 - Sub-misura A3, “Rigenerazione urbana e territoriale”, Linea di intervento 3, intitolata “Realizzazione, implementazione e consolidamento di percorsi e cammini culturali, tematici e storici; avvio della rifunzionalizzazione delle Soluzioni Abitative di Emergenza (SAE); ammodernamento e la messa in sicurezza di impianti sportivi, ricreativi e di risalita”, dal quale si evince che il Comune di Santo Stefano di Sessanio ha accesso alle seguenti  risorse finanziarie per gli interventi di seguito riportati:

-	€ 275.900,59 per l’intervento ““ammodernamento, messa in sicurezza del campo polivalente – tennis e di n. 2 rifugi siti nell’altopiano di campo imperatore” - Soggetto attuatore: Struttura di missione Sisma 2009 – CUP: E77H21012840001;

-	con Determinazione n. 02 del 28.01.2022 del Responsabile dell’Area Tecnica si è proceduto all’affidamento diretto dell’incarico del servizio di redazione del progetto definitivo-esecutivo, del servizio di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, del servizio di direzione lavori, misura e contabilità ed emissione del C.R.E. e del servizio di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (CSE) relativo all’intervento denominato "RIQUALIFICAZIONE VIABILITÀ COMUNALE” in favore del dell’Ing. Beatrice Paolini per l’importo di  € 15.400,00, oltre ad € 616,00 per oneri contributivi al 4% (INARCASSA) ed € 3.523.52 per IVA al 22%, per un importo complessivo di € 19.539,52;
Preso atto altresì:
-	della determinazione del Responsabile del servizio Tecnico n. 28 del 20/05/2022 di conclusione di CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA EX ART. 14, c.2 legge n. 241/1990 – Forma semplificata in modalità asincrona, resasi necessaria per l’acquisizione di pareri, autorizzazioni nonché per l’esecuzione dei lavori di che trattasi;
-	che con Delibera di G.C. n. 42 del 17/06/2022 è stato approvato il progetto esecutivo in questione il seguente quadro economico:

QUADRO TECNICO ECONOMICO	
A)	LAVORI	€     149.454,12	
A.1	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d’asta	€         2.226,81	
A.2	Importo lavori soggetto a ribasso d’asta	€     147.227,31	
	
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE		
B.1)	Rilievi, Indagini, Accertamenti e accatastamenti	€                0,00	
B.1.1)	- Indagini geologiche	€                0,00	
B.1.2)	- Accertamenti e Analisi Strutturali	€                0,00	
B.1.3)	- Rilievi e accatastamenti	€                0,00	
B.1.4)	- Oneri previdenziali per spese tecniche (4,00%)	€                0,00	
B.1.4)	- I.V.A. su indagini, accertamenti e indagini strutturali	€                0,00	
B.2)	Spese tecniche	€       16.645,51	
B.2.1)	-	Spese per attività consulenza o supporto: geologo	€                0,00	
B.2.2)	-	Oneri previdenziali geologo (2,00%)	€                0,00	
B.2.3)	-	I.V.A. su geologo (22,00%)	€                0,00	
B.2.4)	-	Spese tecniche Progettazione – D.L. – CSP - CSE	€       16.645,51	
B.2.5)	-	Spese tecniche Direzione dei Lavori	€                0,00	
B.2.6)	-	Spese tecniche CSP	€                0,00	
B.2.7)	-	Spese tecniche CSE	€                0,00	
B.2.8)	-	Oneri previdenziali per spese tecniche (4,00%)	€            640,21	
B.2.9)	-	I.V.A. su spese tecniche  (0,00%)	€                0,00	
B.2.10)	-	Spese per verifiche tecniche (collaudo statico e tecnico amministrativo)	€                0,00	
B.2.11)	-	Oneri previdenziali verifiche tecniche (collaudo statico e tecnico amministrativo) (4,00%)	€                0,00	
B.2.12)	-	I.V.A. su verifiche tecniche (collaudo statico e tecnico amministrativo)	€                0,00	
B.3)	Accantonamento di cui all’art. 113 D.Lgs 50/2016 e smi (2,00%)	€         2.989,08	
B.4)	Contributo ANAC	€                0,00	
B.5)	Spese per pubblicità gara e commissioni giudicatrici	€                0,00	
B.6)	Imprevisti max 5,00% comprensivi di oneri per la sicurezza e IVA	€         4.788,00	
B.7)	I.V.A. lavori 10,00% di (A)	€       14.945,41	
B)	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€       39.368,01	
			
A	LAVORI	€     149.454,12	
B	SOMME A DISPOSIZIONE	€       39.368,01	
	TOTALE INTERVENTO (A+B)	€    188.822,13	

-	che con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 70 del 16/12/2022 sono stati affidati: 
a)	i lavori di "RIQUALIFICAZIONE VIABILITÀ COMUNALE” - CUP: E77H21012200001 / CIG: 9500998793” alla Ditta “COGET S.R.L.” con sede a Isola del Gran Sasso D’Italia (TE) Zona Artigianale Pacciano snc, – C.F e P.IVA: 01468850670, che ha offerto un ribasso percentuale sull’importo a base di gara pari al 3,75% corrispondente ad un importo di aggiudicazione di € 143.933,10 (di cui € 2.226,81 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta) oltre I.V.A 10%
b)	accertata la somma di € 56.646,64 sul codice di bilancio in entrata 4.03.10.01.001 – ex cap. 553 art. 11 – Competenza 2022. 
c)	impegnata, in favore della menzionata Ditta COGET S.R.L. (C.F e P.IVA n. 01468850670), come sopra meglio individuata, la somma complessiva di € 158.326,41 (IVA al 10% compresa) ed imputare la spesa secondo la seguente ripartizione sul Codice di bilancio 10.05-2.02.01.09.012 - ex cap.  2580 art. 0 in uscita “interventi alla rete stradale comunale a valere sul PNRR”- Competenza 2022;
-	che con Determinazione dell’Area tecnica n. 14 del 19/12/2022 è stato liquidato l’acconto delle competenze professionali all’ing. Beatrice Paolini per un importo pari ad € 7.021,68, oltre il contributo integrativo Inarcassa 4% pari ad € 280,87 per complessivi € 7.302,55, esente IVA ai sensi dell’art. 1, commi da 54 a 89 della legge n. 190/2014 e ss.mm.ii.;
-	che questa Stazione Appaltante ha provveduto all’appalto dei lavori e alla consegna degli stessi, al fine di rispettare i target (obiettivi) e le milestone (traguardi) previsti per i finanziamenti afferenti al Fondo complementare PNRR Aree sisma 2009 e 2016, entro il giorno 31/12/2022; 	
-	che i lavori sono stati sospesi il 09/01/2023, giusto verbale redatto dal direttore dei lavori ed acclarato agli atti di questo Comune in 09/01/2023;
-	che i lavori sono stati ripresi il 30/05/2023, giusto verbale redatto dal direttore dei lavori ed acclarato agli atti di questo Comune in 30/05/2023 prot. 1768;
-	che con Determinazione dell’Area tecnica n. 55 del 09/10/2023 è stato approvato lo Stato Avanzamento Lavori n. 1 a tutto il 22/09/2023 per un importo dei lavori lordo pari ad € 126.001,46, nonché il Certificato di pagamento n. 01 datato 22/09/2023 pari ad € 120.674,62 (al netto della “Ritenuta per infortuni 0,5%” per € 626,69, e del ribasso d’asta del 8,51 % per € 4.700,15), oltre IVA al 10%, liquidando alla COGET s.r.l. un ACCONTO di € 44.858,26, oltre IVA pari ad € 4.485,83, per complessivi € 49.344,09;
-	che con Determinazione dell’Area tecnica n. 1 del 21/01/2024 è stato liquidato alla COGET s.r.l. il SECONDO ACCONTO, pari ad € 51.496,95, oltre IVA 10% pari ad € 5.149,70, relativo al Certificato di pagamento n. 01 datato 22/09/2023 pari ad € 120.674,62;
	Considerato che il Direttore dei Lavori Ing. Beatrice Paolini, ha redatto una Perizia di Variante, acquisita al protocollo comunale n. 2628 in data 30/07/2024 e ammontante ad € 152.317,17 al netto del ribasso d’asta e compresi gli oneri di sicurezza, costituita dai seguenti elaborati:

-	VAR. 01 – Relazione di Variante;
-	VAR. 02 – Documentazione fotografica;
-	VAR. 03 – Elaborato grafico di variante;
-	VAR. 04 – Quadro Economico di Progetto e di Variante;
-	VAR. 05 – CME di Variante;
-	VAR. 06 – Elenco Prezzi;
-	VAR. 07 – Quadro Comparativo;
-	VAR. 08 – Atto di sottomissione;
-	VAR. 09 – Verbale concordamento nuovi prezzi

Visti, in particolare, che i lavori previsti in variante sono stati dettati per rendere l’opera funzionale ed agibile nella sua interezza, in particolare:
- realizzazione nuovo allaccio fognario fino al pozzetto posizionato in corrispondenza del ristorante;
- predisposizione per futuro impianto di illuminazione;
- sostituzione della staccionata in PVC riciclato (prevista nel progetto) con staccionata in acciaio corten al fine di uniformarla con quanto già installato con altri interventi;

Ritenuto di approvare la Variante dei lavori in oggetto, composta dagli elaborati sopra indicati e conservati agli atti dell’Ufficio del RUP, con il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE	
A)	LAVORI		
A.1	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d’asta	€           664.26	
A.2	Importo lavori soggetto a ribasso d’asta	€     157.561,46	
                IMPORTO TOTALE LAVORI                                                         €    158.225,72	
      A.3     Importo lavori al netto del ribasso d’asta del 3,75%                               €    151.652,91	
      A.4      Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d’asta                                         €          664.26	
                IMPORTO TOTALE LAVORI      al netto del ribasso d’asta        €     152.317,17	
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE		
B.1)	Rilievi, Indagini, Accertamenti e accatastamenti	€                0,00	
B.1.1)	- Indagini geologiche	€                0,00	
B.1.2)	- Accertamenti e Analisi Strutturali	€                0,00	
B.1.3)	- Rilievi e accatastamenti	€                0,00	
B.1.4)	- Oneri previdenziali per spese tecniche (4,00%)	€                0,00	
B.1.4)	- I.V.A. su indagini, accertamenti e indagini strutturali	€                0,00	
B.2)	Spese tecniche	€       18.041,21	
B.2.1)	-	Spese per attività consulenza o supporto: geologo	€                0,00	
B.2.2)	-	Oneri previdenziali geologo (2,00%)	€                0,00	
B.2.3)	-	I.V.A. su geologo (22,00%)	€                0,00	
B.2.4)	-	Spese tecniche Progettazione – D.L. – CSP - CSE	€       17.347,32	
B.2.5)	-	Spese tecniche Direzione dei Lavori	€                0,00	
B.2.6)	-	Spese tecniche CSP	€                0,00	
B.2.7)	-	Spese tecniche CSE	€                0,00	
B.2.8)	-	Oneri previdenziali per spese tecniche (4,00%)	€            693,89	
B.2.9)	-	I.V.A. su spese tecniche  (0,00%)	€                0,00	
B.2.10)	-	Spese per verifiche tecniche (collaudo statico e tecnico amministrativo)	€                0,00	
B.2.11)	-	Oneri previdenziali verifiche tecniche (collaudo statico e tecnico amministrativo) (4,00%)	€                0,00	
B.2.12)	-	I.V.A. su verifiche tecniche (collaudo statico e tecnico amministrativo)	€                0,00	
B.3)	Accantonamento di cui all’art. 113 D.Lgs 50/2016 e smi (2,00%)	€         3.164,51	
B.4)	Contributo ANAC	€                0,00	
B.5)	Spese per pubblicità gara e commissioni giudicatrici	€                0,00	
B.6)	Imprevisti max 5,00% comprensivi di oneri per la sicurezza e IVA	€         4.788,00	
B.7)	I.V.A. lavori 10,00% di (A)	€       15.231,72	
B)	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€       36.437,44	
			
    C)	IMPORTO TOTALE INTERVENTO	€     188.754,61	
	ECONOMIE DI PROGETTO	€             67,52	
	TOTALE INTERVENTO (A+B+C)	€     188.822,13	

Dato atto:
-	che al progetto in questione è stato attribuito dal Dipartimento per la Programmazione e il Coordinamento della Politica Economica (DiPE) il C.U.P. E77H21012200001 (Art. 11, comma 1, Legge n. 3/2003 “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione”);
-	che alla procedura di affidamento dei lavori in parola è stato attribuito dall’ Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) il CIG n. 9500998793 (Art. 3, comma 5, Legge n. 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”).

Accertata la capienza finanziaria con imputazione sul codice di bilancio 10.05-2.02.01.09.012 - ex cap.  2580 art. 0 in uscita “interventi alla rete stradale comunale a valere sul PNRR”  sul quale si intende imputare la spesa.

Visti:
-	l’art. 184 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che attribuisce la competenza a liquidare all’ufficio che ha dato esecuzione al provvedimento di spesa sulla base della documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore, a seguito del riscontro operato sulla regolarità della fornitura e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quali-quantitativi, ai termini e alle condizioni pattuite;
-	il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
-	 il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i. (per la parte ancora in vigore);
-	 il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36.

Atteso che il sottoscrittore del presente atto dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall’art. 6 comma 2 e art. 7 del Codice di Comportamento di cui al D.P.R. 62/2013 e di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.

Ritenuta la propria competenza in merito all’adozione della presente determinazione ai sensi dell’Art. 107 del D.Lgs n. 267/2000, nonché in ottemperanza della Delibera di G.C. n. 32 del 21/06/2024 di attribuzione della responsabilità di servizio.

DETERMINA
Per i motivi indicati in premessa che qui si intendono integralmente riportati:

1.	 Di approvare, la Perizia di Variante, acquisita al protocollo comunale n. 2628 in data 30/07/2024 e ammontante ad € 152.317,17 al netto del ribasso d’asta e compresi gli oneri di sicurezza, costituita dai seguenti elaborati:

-	VAR. 01 – Relazione di Variante;
-	VAR. 02 – Documentazione fotografica;
-	VAR. 03 – Elaborato grafico di variante;
-	VAR. 04 – Quadro Economico di Progetto e di Variante;
-	VAR. 05 – CME di Variante;
-	VAR. 06 – Elenco Prezzi;
-	VAR. 07 – Quadro Comparativo;
-	VAR. 08 – Atto di sottomissione;
-	VAR. 09 – Verbale concordamento nuovi prezzi,
e con il seguente quadro economico:
QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE	
A)	LAVORI		
A.1	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d’asta	€           664.26	
A.2	Importo lavori soggetto a ribasso d’asta	€     157.561,46	
                IMPORTO TOTALE LAVORI                                                         €    158.225,72	
      A.3     Importo lavori al netto del ribasso d’asta del 3,75%                               €    151.652,91	
      A.4      Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d’asta                                         €          664.26	
                IMPORTO TOTALE LAVORI      al netto del ribasso d’asta        €     152.317,17	
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE		
B.1)	Rilievi, Indagini, Accertamenti e accatastamenti	€                0,00	
B.1.1)	- Indagini geologiche	€                0,00	
B.1.2)	- Accertamenti e Analisi Strutturali	€                0,00	
B.1.3)	- Rilievi e accatastamenti	€                0,00	
B.1.4)	- Oneri previdenziali per spese tecniche (4,00%)	€                0,00	
B.1.4)	- I.V.A. su indagini, accertamenti e indagini strutturali	€                0,00	
B.2)	Spese tecniche	€       18.041,21	
B.2.1)	-	Spese per attività consulenza o supporto: geologo	€                0,00	
B.2.2)	-	Oneri previdenziali geologo (2,00%)	€                0,00	
B.2.3)	-	I.V.A. su geologo (22,00%)	€                0,00	
B.2.4)	-	Spese tecniche Progettazione – D.L. – CSP - CSE	€       17.347,32	
B.2.5)	-	Spese tecniche Direzione dei Lavori	€                0,00	
B.2.6)	-	Spese tecniche CSP	€                0,00	
B.2.7)	-	Spese tecniche CSE	€                0,00	
B.2.8)	-	Oneri previdenziali per spese tecniche (4,00%)	€            693,89	
B.2.9)	-	I.V.A. su spese tecniche  (0,00%)	€                0,00	
B.2.10)	-	Spese per verifiche tecniche (collaudo statico e tecnico amministrativo)	€                0,00	
B.2.11)	-	Oneri previdenziali verifiche tecniche (collaudo statico e tecnico amministrativo) (4,00%)	€                0,00	
B.2.12)	-	I.V.A. su verifiche tecniche (collaudo statico e tecnico amministrativo)	€                0,00	
B.3)	Accantonamento di cui all’art. 113 D.Lgs 50/2016 e smi (2,00%)	€         3.164,51	
B.4)	Contributo ANAC	€                0,00	
B.5)	Spese per pubblicità gara e commissioni giudicatrici	€                0,00	
B.6)	Imprevisti max 5,00% comprensivi di oneri per la sicurezza e IVA	€         4.788,00	
B.7)	I.V.A. lavori 10,00% di (A)	€       15.231,72	
B)	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€       36.437,44	
			
    C)	IMPORTO TOTALE INTERVENTO	€     188.754,61	
	ECONOMIE DI PROGETTO	€             67,52	
	TOTALE INTERVENTO (A+B+C)	€     188.822,13	

2.	Di dare atto che il presente intervento ricade integralmente nell’ambito dei finanziamenti del PNRR - FONDO COMPLEMENTARE PER LE AREE DEL TERREMOTO 2009 e 2016 - Sub-misura A4, “Infrastrutture e mobilità”, Linea di intervento 5, intitolata “Investimenti sulla rete stradale comunale” – lavori di “RIQUALIFICAZIONE VIABILITÀ COMUNALE;

3.	Di far gravare la relativa spesa sul codice di bilancio 10.05-2.02.01.09.012 - ex cap.  2580 art. 0 in uscita “interventi alla rete stradale comunale a valere sul PNRR”  sul quale si intende imputare la spesa;

4.	 Di dare atto: 
-	che al progetto in questione è stato attribuito dal Dipartimento per la Programmazione e il Coordinamento della Politica Economica (DiPE) il C.U.P. E77H21012200001 (Art. 11, comma 1, Legge n. 3/2003 “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione”);
-	che alla procedura di affidamento dei lavori in parola è stato attribuito dall’ Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) il CIG n. 9500998793 (Art. 3, comma 5, Legge n. 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”);

5.	Di trasmettere copia della presente determinazione all’Ufficio Ragioneria;

6.	Di dare atto che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa verrà pubblicata all’Albo on-line dell’Ente per quindici giorni consecutivi ed, altresì, nella sezione Amministrazione Trasparente in ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs. 33/2013;

Sul presente atto si esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa FAVOREVOLE, ai sensi dell’art. 147 – bis comma 1 del vigente Decreto Legislativo n. 267/2000 e del nuovo regolamento comunale sui controlli interni.	

	Il Responsabile AREA TECNICA	
	F.to  FABIO SANTAVICCA	

RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune al numero 240 per 15 giorni consecutivi a partire dal 02-08-2024

                                                                              	IL RESPONSABILE	
	F.to SERICOLA MARIA CESIDIA